문서번호	치수과-14578
결재일자	2016.9.22.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
김택		성규상		박상준		09/22 김재겸
협조
	재무과장		代유종식
	계약팀장		김종수

★ ◉

「성수2가3동 299-168번지 일대 하수관로 개량공사」

준공기한 연기 검토 보고

2016. 9.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( 시비 150백만원 보조사업 ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 성수2가3동 299-168번지 일대 하수관로 개량공사 -

준공기한 연기 검토 보고

성수2가3동 299-168번지 일대 하수관로 개량공사와 관련 시공물량 증가에 따라 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자 함
		ㅊㅊ

Ⅰ		추진근거

○ 공사실정보고 : 추가공사 검토 요청(화진건설 제2016-09-01호(2016.9.19.))

Ⅱ		공사개요

○ 사 업 명: 성수2가3동 299-168번지 일대 하수관로 개량공사

○ 위    치: 성수2가3동 299-168번지 일대

○ 규    모: 하수관로 개량 D=450 ~ 900mm, L=740m

○ 사업기간: 2016. 3.28. ~ 9.23.

○ 도 급 액: 426,550천 원(시비 127,585천원, 구기금 298,965천원)

○ 도 급 자: 화진건설(주)  대표 박종섭

Ⅲ		준공기한 연기보고

○ 당초 계약된 공사구간에 접하여 추가 개량이 필요하다고 실정보고된 성수2가3동 299-15 ~ 299-37는 관로상태가 노후하고 정비가 시급하므로 본공사에 포함하여 정비하고, 시공물량이 증가되어 절대공기가 부족하므로 준공기한을 연기하고자 함.

- 준공기한 변경

구분	당초	변경	증·감
공사개요	740m	890m	증 150m
공사기간	3.25.~9.23.	3.25.~10.31.	증 38일

- 준공기한 연기 귀책사유: 성동구청(지체상금 미부과)

Ⅳ		조치의견

○ 위와 같이 시공물량 증가사항에 대하여 준공기한을 연기하고 향후 설계변경 정산시행하고자 함.

붙임: 1. 실정보고 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 위치도 및 현황사진 1부.