문서번호	주거환경개선과-10691
결재일자	2016.9.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경정책팀장	주거환경개선과장
이정식		곽석권	09/22 박경서
협조

「성곽마을 행촌권 보전관리 실행계획 수립용역」

준공기한 연기 검토보고

2016.  9.

도 시 재 생 본 부

(주거환경개선과)

「성곽마을 행촌권 보전관리 실행계획 수립용역」

준공기한 연기 검토보고

｢성곽마을 행촌권 보전관리 실행계획 수립용역｣ 관련 현장시장실 운영 (7.25) 결과 검토, 특성화전략인 도시농업 마스터플랜 보완 등에 필요한 절대시간 부족으로 용역기간을 연장하여 사업 추진코자 함

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 성곽마을 행촌권 보전관리 계획수립 용역

❍ 계약기간 : 2015.5.27. ~ 2016.9.26.

❍ 용 역 비 : *********

❍ 용역업체 : ***************

❍ ’15.05.27	: 용역계약 체결
❍ ’15.07.20	: 주민설명회 (교남동주민센터, 240여명 참석)
❍ ’15.07.24	: 성곽마을 추진사항 시장보고 (행촌권 : 도시농업 추진)
❍ ’15.09.23	: 행촌권 재생지원센터 개소 – 행촌공터 1호점
❍ ’15.10.	: 행촌공감 도시재생대학 운영 – 재생학과, 도시정원학과
❍ ’16.01.	: ｢행촌동 도시농업공동체｣ 등록
❍ ’16.01.15	: 도시농업 추진전략 집중보고 (주거사업기획관)
	- 도시농업의 구체적인 추진방안, 마케팅, 사업성분석 등에 대해서는 전문가 등에 의하 세부용역 추진 필요
❍ ’16.02.29	: 2016년 서울형 도시텃밭 조성 보조금 교부계획 (도시농업과-2455호)
	- 도시농업공동체 활성화를 위하여 도시농업공동체 사업비 전액 시비 지원 (종로 : 80,000천원)
❍ ’16.03.08	: 설계변경 추진 (도시농업과-2455호)
	- 마을특성화 전략으로 도시농업 추가과업 및 과업기간 연장 (72,000천원 증, 2개월연장)
❍ ’16.03.~	: 다양한 도시농업사업 추진
	- 육묘장, 양봉장, 옥상경작소, 마을텃밭 등 운영
❍ ’16.03.~	: 행촌공터 1~3호점 리모델링 (신축)
❍ ’15.07.~	: 계획수립을 위한 주민워크숍 (8회)
❍ ’16.07.25	: 도시재생 현장시장실 운영
	- 아름지기 공모전 당선작 행촌마을 블록에 적용방안 검토 - 생산물 활용, 다양한 분야의 컨텐츠 발전방안 및 작은 카페형 점포 검토 등

Ⅱ		추진 경과

Ⅲ		계약 변경사항

❍ 계약변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	’15.5.27~’16.9.26	’15.3.21~’16.11.26	2개월 연장
용 역 비	*********		변경 없음
용역업체	****************************		변경 없음

❍ 용역기한 연장사유

- 7.25 현장시장실 운영결과 반영, 특성화 전략인 도시농업 마스터플랜 보완 등 추가검토가 필요한 사항의 검토를 위한 절대시간 부족으로 용역기간을 연장하여 추진하고자 함

□ 향후계획 : 재무과에 용역계약 변경(연장) 의뢰

붙임   1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 합의각서 각 1부.  끝.