문서번호	공원녹지정책과-14593
결재일자	2016.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
윤석환		양성만	09/22 최윤종
협조

「2단계 창의어린이놀이터 재조성사업」 평가를 위한

어린이놀이터 위원회 현장답사 결과 보고

푸른도시국

(공원녹지정책과)

「2단계 창의어린이놀이터 재조성사업」 평가를 위한

어린이놀이터 위원회 현장답사 결과 보고

창의어린이놀이터 재조성 사업 2단계 평가를 위한 어린이놀이터 위원회 추가 현장답사 결과를 보고함

□ 답사개요

○ 기    간 : '16. 9. 20.(화), 09:00~18:00

○ 답 사 지 : 강동구 샛별어린이공원 등 8개소

○ 답사목적 : 우수사례 발굴 및 개선사항 확인, 가이드라인 수정 보완

○ 참 석 자 : 총 5명(외부위원(3): 김수현, 진승범, 김명순 / 직원(2))

□ 답사결과(주요 지적 사항)  ※ 놀이터별 평가 의견 【붙임 1】

○ 모래놀이공간 모래입도를 가이드라인(2~3mm) 맞게 교체 필요(2개소)

○ 모래놀이공간 둘레목재의 높이와 폭을 유아가 앉을 수 있도록 적정한 치수로 보완 필요(2개소)

○ 공원안내판 형태와 규격이 가이드라인과 맞지 않음(2개소)

○ 목재면, 포장경계, 포장 등 미흡한 마감으로 보완 필요(2개소)

□ 소요예산 : 금450천원

○ 외부위원 수당 지급 : 150,000원/명당 × 3명 = 450,000원(2시간 이상)

○ 예산과목 : 공공조경가 그룹 운영, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

○ 답사 결과 및 놀이터위원회 추가 의견을 종합하여 창의놀이터 가이드라인에 반영

붙임 : 1. 놀이터별 주요 평가의견 1부.

2. 답사 현황사진 1부.  끝.

□ 놀이터별 주요 평가의견 ※ 놀이터별 평가 의견 【붙임 1】

【붙임 1】

연번	자치구	놀이터명	평 가 의 견
1	성북구	우정의공원 (’16.4.30.준공)	· 모래놀이공간 둘레목재의 높이가 높아 유아가 앉아 놀 수 없으므로 일부구간을 낮추는 등 보완 필요 · 시소의 지지기초가 흔들리므로 견고히 고정 필요 · 조합놀이대 볼트를 조여주는 등 지속적인 관리 필요 · 공원안내판이 가이드라인이 제시하는 형태와 맞지 않음
2	서대문구	봉은소공원 (’16.6.13.준공)	· 창의어린이놀이터 취지에 맞지 않음 (놀이터 경계휀스 등 본질적이지 않은 부분에 예산 과다 사용) · 포장경계 및 포장의 거친 마감으로 보완 필요 (탄성포장 시료채취 후 튀어나오게 하는 등 부적정 마감) · 마사토포장 다지기 없이 일반 흙으로 채워져 보완공사 필요
3		봉원소공원 (’16.6.13.준공)	· 경사가 심한 마운딩에 사다리로프 추가 설치 필요
4	동대문구	전곡마을마당 (’16.7.29.준공)	· 모래 입도가 가이드라인(2~3mm) 맞게 교체 필요 · 모래놀이공간 주변 그늘목 추가 식재 필요
5	노원구	갈월어린이공원 (’16.8.20.준공)	· 작은 면적임에도 짜임새있게 조성됨 · 모래 입도가 가이드라인(2~3mm) 맞게 교체 필요 · 주택가와 접한 경사면 녹지에 안전을 위한 보완식재 필요 · 공원안내판 가이드라인에서 제시하는 규격보다 큼
6	도봉구	다람쥐어린이공원 (’16.8.20.준공)	· 전반적으로 창의놀이터 취지에 맞게 조성함 · 모래놀이공간 모범사례이나, 모래 양이 부족하므로 보충 필요
7	강동구	샛별어린이공원 (’16.9.30.준공)	· 흔들말, 조합놀이대 목재 부분(기둥 제외) 등 마감이 거칠어 도료, 사포 등을 통해 매끄럽게 처리 필요 · 조합놀이대 장식물고기 지느러미 부분 흔들리므로 보수 및 손이 닿지 않은 위치로 이동 필요
8		천사어린이공원 (’16.9.30.준공)	· 평균대의 조합놀이대 방향 모서리 튀어나온 부분은 안전사고 우려가 있으므로, 잘라내어 마감처리 필요 · 짚라인 목재가 미송이므로 지속적인 목재관리 필요 · 모래놀이공간 둘레목재를 유아가 앉아서 놀 수 있도록 폭을 현재보다 넓게 보완 필요

⇒ 현장방문 지적사항에 대해서는 자치구에서 보완조치토록 하고, 우수사례 및 지적사항은 3단계 추진시 개최 예정인 워크샵 사례발표를 통해 공유