문서번호	교량안전과-17102
결재일자	2016.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
서성만		代서성만	09/22 박문희
협조
	주무관		김근섭

- 고가차도  관리 기본계획 용역-

설계변경 검토결과 보고

2016. 09.

교량안전과

- 고가차도 철거․재활용에 따른 교통운영개선방안 수립 및 관리 기본계획 용역- 설계변경 검토결과 보고

고가차도 관리 기본계획 용역 준공시기가 도래함에 따라 설계변경을 시행하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 고가차도 철거․재활용에 따른 교통운영개선방안 수립 및 관리 기본계획 용역

대    상 : 한남2고가차도 등 16개소

용역기간 : 2015. 6.16. ~ 2016. 9.27.

총용역비 : 255,893천원

계약상대자 : ㈜한국종합기술 대표 이강록 외1명

Ⅱ		추진사항

‘15. 3.14   용역 발주

‘15. 6.16   용역 착수

‘15. 6.25   착수 보고

‘16. 6.17   자문회의 개최

‘16. 6.29   최종 보고

‘16. 8. 5   시장 현안업무 보고

‘16. 8.11   관리계획안 보고(행정2부시장 방침 제226호)

Ⅲ		설계변경 내역

설계변경 사유

- 검토대상 고가차도수 1개소 증가 : 15개소→16개소(동호대교남단 접속교)

- 구조검토 해석 대상(철거대상) 감소 : 16개소→8개소

용역비 증·감 내역

구 분	당 초	변 경	증·감
용역비	255,893,000	236,009,000	감) 19,884,000

주요공종 수량 증․감 내역

공 종	단위	수 량		공 사 비
		당 초	변 경	당 초	변 경	증 · 감
기본계획비	개소	15	16	21,230,003	22,039,209	증) 809,206
구조검토비	개소	16	8	18,023,498	9,059,728	감) 8,963,770

Ⅳ		향후계획

재무과에 설계변경 의뢰하여 변경계약을 체결토록하고, 변경된 내용에 따라 준공처리 코자 함.

따로 붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.