문서번호	급수운영과-20906
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장		북부수도사업소장
김종필토	이승완	이계환		09/23 박철규
협 조
	시설관리과장		장종욱
	주무관		박미영

소블록 배급수관망 개선사업 연차별 추진계획

2016. 9.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

소블록 배급수관망 개선사업 연차별 추진계획

고품질 아리수를 단수 및 정체수 없이 안정적으로 공급하기 위한 연차별(2017~2022년) 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획을 보고 드림.

□ 추진 근거

○ 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 변경【누수방지과-8654호(2016.8.23)】

□ 사업 개요

○ 사업 목적

- 고립 지역의 단일 배관을 이중화하여 단수없는 급수체계 구축

- 단절 구간을 순환 배관망을 형성하여 수질 저하 방지

	⇒

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 4,270백만원

○ 정비대상 : 107개소

구 분	대 상	연차별 추진사항				잔여대상
		계	‘14년	‘15년	‘16년
합 계	107	29	11	6	12	78
단일배관 이중화	14	7	2	1	4	7
단절관 순환관망	93	22	9	5	8	71

□ 세부 추진 계획

○ 연차별 추진계획

구 분		계	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년
계 (집행 금액)	사업비(백만원)	4,270	63	288	248	459	591	591	626	702	702
	대상(건)	107	11	6	12	9	13	13	14	14	15
	연장(km)	6.09	0.48	0.61	0.52	0.562	0.738	0.738	0.782	0.782	0.878
단일배관 이중화	사업비(백만원)	1466	13	100	100	183	183	183	184	260	260
	대상(건)	14	2	1	4	1	1	1	1	1	2
	연장(km)	1.717	0.04	0.17	0.152	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.305
단절관 순환관망	사업비(백만원)	2804	50	188	148	276	408	408	442	442	442
	대상(건)	93	9	5	8	8	12	12	13	13	13
	연장(km)	4.375	0.44	0.44	0.37	0.352	0.528	0.528	0.572	0.572	0.573

○ 추진 방향

- 누수시 단수 등 피해가 큰 지역을 우선 정비대상으로 선정

- 단절된 상수도관으로 수질저하 등 민원발생 구간 우선 정비

- 설치년도, 누수발생 빈도 등을 고려하여 연차별로 사업 추진

- 재개발 등 도심개발사업 지역은 우선 정비대상에서 제외

○ 추진 방법

- 단일배관 이중화

ㆍ수도정비기본계획과 연계하여 추진

ㆍ사유지 및 도로굴착통제 여부 등 현장 사전조사 철저

ㆍ가능한 구간별로 묶어 단위사업으로 발주

- 단절관 순환관망

ㆍGIS 배관망도와 현장과의 일치 여부 확인 후 공사시행(오류시 GIS 수정)

ㆍ급수세대가 없는 단절관은 분기점에서 폐쇄 조치

ㆍ지장물로 시공 불가한 단절관은 퇴수변 활용 등 대안 모색

ㆍ소규모 공사의 경우는 연간단가계약 공사로 시행(건별 도급액 20백만원 이하)

□ 향후 계획

○ 사업소 세부추진계획을 수립 및 매월 추진실적 본부(누수방지과)에 보고

○ 연차별 추진계획에 따라 본부의 예산배정에 의거 정비추진

붙 임 : 단일배관ㆍ단절관 정비대상 1부.  끝.