함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 대한 회신(역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-11995(2016.09.21)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소가 발주하고 귀 공단에서 감리중인 “역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사”의 실정보고사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 통보하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 설계변경시 중복사항, 과다사항 등이 없도록 하고 현장지도시 확인내용 및 감독자 증빙자료(시공사진, 설계도서 등)에 따라 정확한 설계변경이 되도록 처리하시기 바랍니다.

가. 실정보고에 대한 검토결과

구 분	현 황 및 문 제 점	공 단 의 견	검토결과
2구간	개나리래미안아파트 민원이 야간공사 소음으로 공사를 완강히 반대하고 있는 실정임. 잔여공종에 대하여 주간공사로 작업시간 변경토록 발주청 업무지시된 상태임.	잔여공사에 대하여 주간공사로 변경시 공사기간이 부족한 실정으로 민원인이 거주하는 아파트앞 구간에 대하여만 주간공사로 변경하고, 주간공사로 인한 단수민원을 해소코자 부단수(라인스토핑)공법 및 지세할증을 반영하는 것이 타당하다 사료됨.	야간공사 소음으로 인한 민원해결을 위해 주간공사로 변경하여 시공하고 주간공사로 인한 단수, 교통 등 시민들의 불편이 없도록 공사장 안전관리에 만전을 기하고, 향후 설계변경시 반영하여 정산 시행할 것.

끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	09/23 조상덕
협조자
시행	급수운영과-18891	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개