문서번호	기전과-9418
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
박정민		이영목	09/23 신응수
협 조
	주무관			백윤광

『2016년 도로교통소통(화랑로 화랑교)개선 교통신호기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

2016. 9.

북부도로사업소

(기 전 과)

『2016년 도로교통소통(화랑로 화랑교)개선 교통신호기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

우리 사업소에서 원활한 차량 소통 및 신호체계 정비를 위해 추진한 『2016년 도로교통소통(화랑로 화랑교)개선 교통신호기공사』에 대해 감리사로부터 설계변경  기술검토의견서가 접수되어 아래와 같이 설계변경(정산)코자 함.

▢ 관련근거

❍ 2016. 09. 23. 감리사 설계변경 기술검토의견서 제출

▢ 사업개요

❍ 공 사 명 : 2016년 도로교통소통(화랑로 화랑교)개선 교통신호기공사

❍ 공사기간 : 2016. 06. 17. ~ 2016. 09. 30.

❍ 계약금액 : 금97,704,390원

❍ 시공업체 : 대성전기건설공사 대표 김대용

❍ 공사위치 : 성북구 화랑로 화랑교(KT월곡지사 앞)

▢ 설계변경 추진내용

❍ 설계변경 금액                                           (단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증ㆍ감	비 고
계		97,704,390	80,057,000	17,647,390(감)
도급비	공사원가	88,822,173	72,779,091	16,043,082(감)
	부가가치세	8,882,217	7,277,909	1,604,308(감)

❍ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(401-01)

❍ 설계변경 사유

- 현장 여건에 맞도록 물량 증·감 및 제경비 등 정산에 따른 설계변경 필요

❍ 설계변경 산출 내용

- 책임감리원 기술검토 의견서(설계변경) 주요변경내용 첨부문서 참조

▢ 보고자 의견 및 조치사항

❍ 상기 변경사유와 같이 계약물량 대비 공정량 증‧감에 따라 물량 변경 및 제경비로 인한 증·감 부분을 반영한 사항으로,

❍ 책임감리사로부터 접수된 설계변경(정산)내역에 대해 검토한 결과 타당하여 설계변경 추진코자 함

붙임 : 1. 설계변경 서류 제출(감리사) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.  끝.