문서번호	방재시설부-14840
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송영배		김흥근	09/23 임춘근
협조
	주무관		이병환

잠원2 빗물펌프장 신설공사 (자연방류관로)

기존 시설물 철거 및 복구비 미반영 실정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

잠원2 빗물펌프장 신설공사 (자연방류관로)

기존 시설물 철거 및 복구비 미반영 실정 보고

잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로) 추진중 방류관로와 방류토구 시공구간에 저촉된 기존 시설물 철거 및 복구에 누락된 시설물(호안블록, 방호벽, 흄관, 경계블록 등) 복구비 미반영 부분의 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 잠원2감 2016-189(`16.8.11.) : 시설물 철거 및 복구비 미반영분
(방류관로와 방류토구 구간) 실정보고

□ 사업개요

○ 위    치 : 압구정로 현대고~신사공원앞~한강(저수호안)

○ 공사규모

- 관로(2@3.0×2.5~1.5m, L=628m), 수문2개소, 가동보 1개소

○ 공사기간 : 2013.1.3. ~ 2016.12.31.

○ 총공사비 : 12,199백만원(도급비 8,907백만원)

○ 시공사 / 사업관리 : 에스트건설(주)외 1 / 신명건설기술공사

□ 현황 및 검토내용

○ 현황도면

방류토구(한강 저수호안) ~ 방류관로(방류수문) 시공구간

○ 현황사진

시설물 설치구간 전경사진

○ 검토내용

- 방류관로와 방류토구 시공구간에 저촉된 기존 시설물 철거 후 복구에 누락된 시설물(호안블록, 방호벽, 흄관, 경계블록 등)이 발생하여 설계에 반영하고자 함.

· 당초 : 아스콘포장(T=12.5) 101㎡, 콘크리트 포장(T=20) 17㎡

· 변경 : 아스콘포장(T=12.5) 139㎡, 호안블록(40*40*10) 142㎡           방호벽(50*60) 17.5m, 흄관(￠600) 17m

경계블록(20*25, 12*12) 90m

천단콘크리트포장(T=30) 34㎡

○ 소요예산(증 20,044천원)

공 종	단위	당 초		변 경		증•감	비 고
		수량	금 액	수량	금 액
총공사비			4,871		24,915	20,044
도급액			2,200		19,228	17,028
직접공사비			1,498		12,692	11,194
아스콘포장	㎡	101	1,139	139	1,493	354
기존구조물철거	㎥	18	359	53	875	516	아스콘깨기 등
부대공	식	1	-	1	10,324	10,324	호안블럭설치 등
제경비(부가세포함)	식	1	702	1	6,536	5,834
관급자재비	식	1	1,691	1	3,017	1,326	아스콘 등
폐기물처리비	ton	44	980	122	2,670	1,690

□ 건설사업관리자 검토의견

○ 한강공원 자전거도로에서 방류토구까지 공사구간 내에 저촉된 시설물은 이용자에 불편이 없고 제 기능유지를 위하여 미반영된 시설물 철거 및 복구비는 설계에 반영하여 시행함이 원활한 공사 추진을 위하여 타당하다고 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 검토의견과 같이 실정보고사항을 승인처리하고 공사비에 반영하여   추후 설계변경하고자 함.

붙임  감리단 실정보고서 1부.  끝.