함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청 의뢰(거마가압장~거마배수지간 송배수관정비공사)

우리 사업소에서 시행하는 거마가압장~거마배수지간 송배수관정비공사에 대하여 준공기한 연기사유가 발생되어 아래와 같이 준공기한 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기대상 공사

1) 공 사 명 : 거마가압장~거마배수지간 송배수관정비공사

2) 계 약 자 : 홍익설비  대표 강오영

3) 계약금액 : 217,335,890원

4) 준공기한

- 당 초 : 2016. 05. 03 ~ 2016. 09. 29.

- 변 경 : 2016. 05. 03 ~ 2016. 10. 24.

5) 준공기한 연기사유

- 야간공사 소음민원으로 인한 공사중지, 주간작업 변경 협의, 작업지시 추가 및 폭염 등으로 인한 절대공기 부족

나. 귀책사유 : 강동수도사업소(지체상금 미부과)

붙임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의서 및 변경예정공정표 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	김종수		주무관	김용현		급수운영과장	09/26 전명수
협조자	주무관	임홍희
시행	급수운영과-18147	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	3146-5189	/	kjso0704@seoul.go.kr	/	부분공개(5)