문서번호	설비부-14881
결재일자	2016.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	09/26 권오식
협 조

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계) 조성 전기공사 -

공사기간(전체 및 2차분) 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

도시기반시설본부

설비부

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계) 조성 전기공사 -

공사기간(전체 및 2차분) 연기 검토 보고

본 전기공사의 선행 공정인 토목공사에서 다목적 체육시설 및 온실을 추가 설치하고자 공사기간을 연기함에 따라 당초 준공기한으로는 절대공기가 부족하게 되어 책임 건설사업관리기술자로 부터 전기공사(전체 및 2차)에 대한 준공기한 연기 요청이 있어 다음과 같이 조치하고자 검토 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사

□ 공사규모 : 구조물 복개(S=33,978㎡) 후 상부 공원화 시설

□ 공사기간 : 총차 15.07.15.~16.09.30.( 2차 16.02.02.~16.09.30.)

□ 도 급 비 : 총차 금1,035,539,000원(2차 금715,539,000원)

□ 계 약 자 : 서보전력(주) 대표 조재환

□ 감 리 자 : ㈜유신

2		공사기간(전체 및 2차분) 연기검토 내용

□ 관련근거

○ 탄천복개 4단계 상부 활용계획 변경 보고 : 물재생시설과-5664호(‘15.12.28)

- 텃밭 대신 주민 및 학생 등 직집 참여 유실수, 초화류 단지 등 조성

- 실내 활동공간 막구조물(체육관) 및 유리온실 설치

○ 탄천복개공원 추가공사(체육관, 온실) 시행계획 통보  : 방재시설부-12489호(‘16.08.08)

○ 전기공사 공사기간 연장요청 : 탄천감16-256호(2016.09.26.)

□ 공사기간 연기사유

○ 본 전기공사 진행중 복개 상부 활용 방안 재수립에 따른 다목적 체육시설 및 유리온실 추가 설치 사항 발생으로 당초 공사기간으로는 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기조치하고자 함.

- 공정율(토목 90%, 전기 69%) : 현재 2016.09월 기준

<조감도 및 평면도>

다목적 체육시설	유리 온실	현장 전경(복개상부)

□ 공사기간 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
전 체	2015.07.15.~2016.09.30	2015.07.15.~2017.04.30	증7개월
2 차	2016.02.02.~2016.09.30	2016.02.02.~2017.04.30	증7개월

□ 귀 책 소 재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금부과여부 : 미부과

3		조 치 계 획

□ 본 전기공사(전체 및 2차분)의 당초 준공기한을 선행 공정인 토목공사의 준공기한 연기내용과 같이 2017.04.30.일까지 연기조치하여 추가 시설물(다목적 체육시설, 유리 온실) 설치 완료하는데 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 다목적 체육시설 및 온실공사 시행계획 검토 보고 1부. 끝.