의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-19630
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
진명국		이동훈	김영수	형태경	09/26 고인석
협 조
	주무관				오열상
	주무관				이상근
	주무관				심규진

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1581번, 남재경 의원, 문화체육관광위원회)

따로붙임 :      (국회․시)의원 요구자료 1부.  끝.

남재경 의원(문화체육관광위원회, 새누리당)

□ 요구번호 1581

1. 월드컵 대교 건설 추진현황 및 지연사유– 사업계획 수립~현재까지

2. 서부간선도로 지하화 추진상황

□ 월드컵 대교 및 서부간선도로 관련 요구자료에 대하여 다음과 같이 제출합니다.

1. 월드컵 대교 건설 추진현황 및 지연사유

1) 사업개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

○ 사업규모 : 왕복 6차로(폭 31.4m), 연장 1,980m

○ 사 업 비 : 2,589억원

○ 공사기간 : '2010. 3. 22 ~ '2020. 8.31 (126개월)

2) 추진현황

○ '01.04.13~'06.12.30 : 기본 및 실시설계 시행

○ '09.01. : 서부간선지하도로 및 월드컵대교 추진계획

○ '09.09. : 도시계획시설 결정

○ '10.03. : 공사 착공

○ '12.10. : 수상구간 우물통 기초 시공 완료

○ '15.02. : 수상구간 교각 15기 시공 완료

○ '15.05. : 북단IC Ramp-A, B 임시개통

○ '16.09월 현재 : 북단 접속교 및 연결로 시공, 사장교 주탑 시공

3) 향후계획

○ '17.12. : 사장교 주탑 시공완료

○ '18.12. : PSC박스 거더 완료, 케이블공 시공 완료

○ '19.12. : 남단 지하차도, 남단 연결로 및 접속교 시공 완료

○ '20.08. : 공사 준공

4) 공기연장 현황 및 사유

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	‘10. 3.22. ~ ’15. 8.22.	‘10. 3.22. ~ ’20. 8.31.	증 60개월
연장사유	연차별 예산투입 부족에 따른 공정지연

2. 서부간선도로 지하화 추진상황

1) 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 양평동 ~ 금천구 독산동

○ 사업규모 : 왕복 4차로, 연장 10.33km (소형차 전용)

○ 사 업 비 : 5,200억 원(시비 1,380억원 / 민간자본 3,820억원)

○ 공사기간 : 2016.3. ~ 2021.2

2) 추진현황

○ '07.12.20. : 민간제안서 제출(현대건설 등 10개사)

○ '09.06.29. : 민간투자사업심의위원회 심의(기획재정부)

○ '09.12.31. : 제3자 제안공고

○ '13.10.17. : 도시계획시설(도로) 결정(안) 열람공고

○ '14.02.27. : 도시계획시설(도로) 결정 고시

○ '15.03.11. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ '15.08.21. : 환경영향평가 완료

○ '15.12.03. : 실시계획 승인

○ '16.03.01. : 공사 착수

○ '16.09.현재 : 공사 진행중(공정율 3%)

※ 대기질 관련 민원으로 환기구 공사 잠정 중단중

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시기반시설본부 토목부)	담당사무관	이동훈
	☎ 3708-2546	주무관 (서부간선)	진명국
	☎ 3708-2548	주무관 (월드컵대교)	심규진
	작 성 일 : 2016. 9. 26.