문서번호	토목부-19551
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	09/26 김영수
협조
	주무관		이정원

가든아파트 추가 민원처리 결과보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2016.9.

도시기반시설본부

(토목부)

가든아파트 추가 민원처리 결과보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

겸재교 건설 당시 가든아파트 민원에 대하여(□16.6.24.) 완료되었으나 주차구획 및 방화문 도색과 놀이터 시설 설치 등 추가 민원처리 결과 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 토목부-6462호(2016.4.4.) 민원처리 계획보고

○ 동일감 제16-188호(2016.9.8.) 실정보고 제출

- 터널방음벽 빛 반사 민원사항 검토보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사

○ 공사위치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

○ 공사규모

- 본교량   : B=18.24m, L=235m(Extra Dosed교)

- 접속교량 : B=9m, L=160m, 접속램프 2개소

- 도로확장 : B=20m → 30m, L=750m

○ 공사기간 : □08.10.23.∼ □16.12.31.

○ 도 급 비 : 31,006백만원

○ 감 리 단 : ㈜동일기술공사 외 1개사

○ 시 공 사 : ㈜한진중공업 외 1개사

○ 공 정 률 : 96%

Ⅲ		보고내용

□ 가든아파트 추가 민원 처리 반영

○ 겸재교 건설 당시 가든아파트 민원에 대하여(□16.6.24.) 완료되었으나 주차구획 및 방화문 도색과 놀이터 시설 설치 등 추가 민원 처리

〈현황사진〉

설치후

설치전

도색전

도색전

도색후

도색후

〈벤치 및 안전수칙〉

설치위치	벤치	안전수칙 표지판

〈수량현황〉

구 분	단 위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
벤치	개소	-	3	3
안전수칙표지판	개소	-	1	1
현관문도색	[eqn: m ^{2}]	672	805	133
차선도색	[eqn: m ^{2}]	152	339	187
장비비	hr	480	459	21

〈공사비 현황〉

(단위:천원 VAT포함)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1. 부대공
현관문 도색	8,022	9,609	1,587
장비비	25,093	23,995	1,098
차선도색(융착선/실선, 백색)	3,968	7,102	3,133
차선도색(융착선/실선, 황색)	-	1,862	1,862
벤치 설치	-	1,718	1,718
안전수칙 표지판 설치	-	341	341
직접공사비	37,083	44,628	7,545
제경비	12,817	14,872	2,055
도급비	49,900	59,500	9,600

- 적용단가 검토

․ 기존비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①항 1호에

의거 계약단가 적용

․ 신규비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ②항에                   의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 계약 상대자간 협의 후                   결정단가 적용

Ⅳ		조치계획

○ 겸재교 민원처리 계획보고에 따른 가든아파트 추가 민원 사항(놀이터       시설, 도색 등) 처리 결과는 적정함으로 향후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙임 : 1) 감리단 검토 의견서 1부.  끝.