문서번호	도시철도설비부-10508
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장	도시철도국장
고명규	박동규	정찬웅	09/27 이정화

『원전 하나 줄이기를 위한 지하철 9호선 연장건설(3단계)』

회생에너지 저장장치 제작․설치 시행계획

2016. 9

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	철도기술연구원 도시철도운영사
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『원전 하나 줄이기를 위한 지하철 9호선 연장건설(3단계)』

회생에너지 저장장치 제작․설치 시행계획

지하철 9호선 3단계 변전소에 열차 제동시 발생되는 전력을 재이용 할 수 있는 회생에너지 저장장치를 설치하여, 전차선로에 안정적인 전원공급과 전력사용량을 절감함으로써 저탄소 녹색성장 정책에 기여코자 함.

구매개요

○ 건    명 : 서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 회생에너지 저장장치 제작・설치

○ 규    격

사용전압 : DC 1,500[V] ~ 1,800[V]

정격용량 : 1,000[kW]

○ 수    량 : 2식(935 및 938변전소)

○ 소요예산 : 1,551백만원

○ 구매방법 : 조달구매(국제입찰, 규격·가격 분리입찰)

○ 납품기한 : 2018. 12. 10

추진현황

○ `14.02.21 : 9호선 연장구간(2, 3단계) 시스템분야 실시설계 준공

○ `14.11.03 : 9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 발주계획 방침(본부장)

○ `14.11.07 : 9호선 연장건설(3단계) 시스템 장비 구매계획 검토 보고

○ `15.09.02 : 9호선 연장건설(3단계) 송변전공사(1, 2구간) 착공

○ `16.03.03 : 회생에너지 저장장치 최적 설치 방안 자문회의(1차)

○ `16.04.04 : 회생에너지 저장장치 최적 설치 방안 자문회의(2차)

○ `16.09.23 : 회생에너지 저장장치 제작・설치 시방서 및 내역서 작성

업체선정

○ 입찰방법 : 국제입찰

지방계약법 제5조(국제입찰에 의한 지방자치단체 계약의 범위)에 의함(3.3억원 이상)

○ 낙찰자 선정방법 : 규격·가격 분리입찰

지방계약법 시행령 제18조(2단계 입찰) ③항에 의함.

∙물품의 제조・구매 또는 용역의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우

에는 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있다.

∙이 경우 규격입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격입찰을

개찰하여야 한다.

제작설치(납품) 자격 : 단독 또는 공동도급 가능

∙공고일로부터 5년 이내 전차선 가선전압이 DC 1,500[V]인 국내 도시철도에

1,000[kW] 이상의 회생에너지 저장장치를 일괄 납품한 실적이 있는 업체로서,

∙전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 등록 업체.

○ 입찰제안서 평가계획

심사 평가표

구 분	항 목 별	평 가 항 목
수 행 기 술 평 가	제안서	제안서 내용
	설계능력	열차 회생에너지 저장장치 설계 가능여부
	전기공사 수행여부	전기공사업 등록 여부
제 품 규 격 평 가	품질인증	국내 및 국제 품질규격 인증 여부
	동작 주위온도	최고온도 : 40℃ 이상, 최저온도 –5℃ 이하
	정격용량	1,000[kW] 이상 ※ 슈퍼캐패시터 28[MJ] 이상, 배터리 151[MJ] 이상
	인터페이스	HSCB, 지락계전기, SCADA와 호환여부
	설치면적	935 및 938변전소 설치 가능여부
	납품실적	공고일로부터 최근 5년 이내 전차선 가선전압이 DC 1,500[V]인 국내 도시철도에 일괄 납품실적 여부

적격자 선정

∙심사평가표에 의하여 입찰참가자가 제출한 서류의 적합여부로 평가

∙평가표의 평가항목중 1개 항목이라도 부적합시 종합판정은 부적격으로 판정

향후계획

○ `16.10.04 : 조달발주 의뢰

○ `16.10.31 : 입찰공고

○ `16.11.10 : 규격심사(입찰제안서 심사 평가)

○ `16.11.20 : 낙찰자 선정 및 계약체결

기대효과

○ 정부의 저탄소 녹색성장 정책과 우리시 원전 하나 줄이기 정책에 기여

○ 전차선 가선전압 안정화로 전기설비 신뢰성 향상 및 열차 전자부품 수명연장

○ 회생제동 사용빈도 증가로 열차의 정차위치 정확도 및 승차감 향상

○ 공기제동 사용빈도 감소로 터널환경 개선(소음, 진동, 분진발생 감소)

○ 회생전력 재이용량 증가로 연간 약 170백만원의 전기요금 절감

붙 임 : 규격・가격 분리입찰 사유서 1부.  끝.