문서번호	총무과-16826
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	총무부장
임봉순	박병현	09/27 이상국
협 조
	주무관		강상천

이촌안내센타 현장근로자 근무환경개선 전기공사 공사기간 연장보고

총 무 부

(총무과)

이촌안내센타 현장근로자 근무환경개선

전기공사 공사기한 연장보고

2016년 한강공원 현장근로자 근무환경개선사업으로 시행하는 이촌안내센타 전기공사의 공사기한이 주공정보다 앞서 원활한 공사진행에 지장이 예상되어원활한 공사진행 및 마무리를 위해 공사기간을 연장하고자 보고드림.

Ⅰ		근 거

○ 총무과-14971호(2016.8.26.) 계약체결-이촌안내센타 현장근로자 근무환경개선 전기공사

Ⅱ		공사 개요

○ 공 사 명 : 2016년 이촌안내센타 현장근로자 근무환경 개선 전기공사

○ 공사 기간 : 2016.8.17. ~ 2016.9.30

○ 공사내용

- 전등 및 전열 설비 1식

- 약전 및 소방설비 1식

○ 사  업  비 : 19,837,000원

○ 시  공  사 : 중부전기 대표 조중건

	< ※ 건축공사 >
- 공사기간 : 2016.9.5. ~ 2016.10.19 - 공사업체 : 송림건설(주) 대표 조동현 - 공사금액 : 134,034,400원 - 주요공사내용 ; 철거공사,방수 및 타일, 칸막이, 창호공사 등 건축물 내부에 대한 개·보수 공사 및 설비(냉·난방,오·배수시설개선 등)

Ⅲ		공사기한 연기

○ 연기사유 : 기 진행중인 건축공정에 맞추어 공사기한 연장

○ 준공기한

- 당 초 : 2016.8.17. ~ 2016.9.30.

- 변 경 : 2016.8.17. ~ 2016.10.26.(26일 연장)

○ 귀책사유 : 한강사업본부

○ 지채상환금 : 미 부 과

Ⅴ		향후계획

○ 공사 계약기간 연장 의뢰 : 2016. 9. 27

○ 공사 계약기간 변경계약 : 2016. 10. 04

○ 공사완료 : 2016. 10. 26

○ 준 공 검 사 : 2016. 10. 30

붙임 : 1. 계약체결 통보서 1부.

2. 합의서 1부.끝.