투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	노원구청장(토목과장)
(경유)
제목	중랑천 초안산앞 보행교량 설치 업무협조 요청 회신

1. 토목과-16461(2016.9.20.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 “중랑천 초안산앞 보행교량 설치 공사”의 보행교량을 월계역까지 연결 될 수 있도록 교각(P5)을 보강하고 강재에 브라켓 설치 검토 시공 반영 요청 사항에 대하여‘16.6.16(목) 귀구 참여 공사관계자 합동 회의시(Kick Off meeting) 사업주관부서(하천관리과)에서 설명 드린바와 같이 월계역까지 보행교량 추가 연장은 하천사업으로 시행이 곤란하다는 의견이었으며

3. 사업주관부서의 지침 없이는 귀구의 업무협조 요청에 대하여 우리본부에서 반영 추진은 곤란하고 현재 본 공사의 설계용역 준공 및‘16.4.29일 공사 착수하여 9월 현재 P5 교각에 대하여 기초 파일 시공 완료 등으로 귀구 의견 반영 시 재 설계(선형 변경으로 교각 및 상부 공 등 전체 재설계 하여야 함)로 인한 공기 지연(간접비 발생) 등 애로사항이 많으므로 당초 계획대로 우리본부에서는 사업을 추진코자 하오며 추가 보행교량 연장에 대하여는 귀구와 서울시 사업주관부서간 별도 협의 추진하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김동현		교량건설과장	박용택		토목부장	09/27 김영수
협조자	주무관	노순재
시행	토목부-19706	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 14	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개