투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	「박물관 대형LED멀티미디어 시스템 구축」사업기간 변경요청

1. 관련근거

가.「박물관 대형LED멀티미디어 시스템 구축」계획(시설과-3176,2016.6.24.)

나. 계약의뢰(시설과-4971,2016.9.22.)

2. 위 호와 관련하여 「박물관 대형LED멀티미디어 시스템 구축」의 사업기간을 아래와 같이 변경 요청 합니다.

-아 래-

가. 사업명 : 박물관 대형LED멀티미디어 시스템 구축

나. 사업기간

- 변경전 : 계약일로부터 ~ 2016.12.15

- 변경후 : 계약일로부터 ~ 2016.12.30

다. 변경사유 : 제작 및 설치 공정 기간연장

끝.

	서울역사박물관장
주무관	이준의		시설과장	09/27 오삼록
협조자
시행	시설과-5053	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	724-0297	/전송	724-0244	/	artjun@seoul.go.kr	/	대시민공개