투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	무궁화단지주택재건축정비사업조합 조합장 귀하
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 공사기간 연장승인 통보 (서대문구 홍제동 홍제무궁화단지 주택재건축사업지 주변)

1. 무궁화 2016-073(2016.09.26.)와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 요청한 교통안전시설물 원인자 부담공사 공사기간 연장신청에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연장승인하니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사

나. 공사위치 : 서대문구 홍제동 홍제무궁화단지 주택재건축사업지 주변

다. 원 인 자 : 무궁화단지주택재건축정비사업조합

라. 공사기간 연장 승인내역

- 당 초 : 2016.1.8. ~ 2016.9.30.

- 변 경 : 2016.1.8. ~ 2016.11.30.

※ 교통안전시설정보(T-GIS)에 시설물정보 입력 후 준공 요청

마. 변경사유 : 온라인리포트 관련 통신선 보수로 인한 공사기간 연장.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
전문관	김진종		기전과장	09/27 양영민
협조자
시행	기전과-10460	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	대시민공개