문서번호	시설관리과-29113
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이연한		한상근	09/27 이경재
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(용문중.고등학교외 10개소 아리수 직결음수대 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

중부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의자료

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 용문중.고등학교외 10개소 아리수 직결음수대 설치공사

나. 공사개요 : D= 13∼30㎜, L= 1,305m

다. 공사기간 : 2016. 06. 24 ~ 2016. 10. 04

라. 도 급 비 : 81,798,560원

마. 계 약 자 : (주)부경엔지니어링 대표 김성범

바. 개최일시 : 2016.09.27. 15:00

사. 참 석 자 : 시설관리과장, 시설6급 김상웅, 시설6급 한상근, 시설6급 이유찬

시설6급 박장진, 시설6급 유명수

2. 설계변경 현황

가. 계약금액                                                             원)

구 분	당 초	변경	증.감	비 고
도 급 비	81,798,560	88,050,000	증) 6,251,440
공급가액	74,362,328	80,045,455	증) 5,683,127
부 가 세	7,436,232	8,004,545	증) 568,313

나. 공사개요                                                              m)

구 분	당 초	변경	증.감	비 고
D=13~30㎜	1,305	1,533	증) 114

나. 설계변경 주요 내용

①. 공사중 물량 증.감 사항 발생

- 물량증가 : 스텐레스배관공(D=15mm) 등 27개 공종

- 물량감소 : 동관용접(D=20mm) 등 13개 공종

※ 음수대 추가 설치요청에 따른 시공물량증가(홍익사대부중,숭례초(유치원),정릉2동주민센터)

관련근거 : 공사실정보고 시설관리과-28092(2016.09.19.)

②. 보험료 정산 : 건강보험,연금보험료,노인장기요양보험료 실납부내역 정산

3. 주요 검토 사항

가. 물량이 증.감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 건강,연금,노인장기요양보험료 미납부로 감액처리.

4. 위원회 심의결과

가. 상기내용과 같이 설계변경 승인