투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사 건설폐기물처리용역 준공기한 연기의뢰

「탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 건설폐기물처리용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 건설폐기물처리용역

나. 용 역 비 : 98,088,000원(2차 35,481,000원)

다. 용 역 자 : ㈜도성개발  대표  박진영

라. 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
총차	2014.3.18.~2016.9.29	2014.3.18.~2017.4.30	증) 7개월
2차	2016.3.24.~2016.9.29	2016.3.24.~2017.4.30	증) 7개월

〇 연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 1) 준공기한 연기검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송민영		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	09/27 임춘근
협조자	계약2팀장	양주춘
시행	방재시설부-14997	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8762	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개