문서번호	방재시설부-15000
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		김흥근	09/27 임춘근
협 조

서초역~방배로간 도로개설공사

수직벽 숏크리트 타설 변경 검토 보고

2016. 9

도시기반시설본부

(방재시설부)

서초역~방배로간 도로개설공사

수직벽 숏크리트 타설 변경 검토 보고

서초역~방배로간 도로개설공사의 수직벽 숏크리트 타설 설계(두께 및 리바운드량)가 관련규정과 부적합하게 설계되어 있어 이에 대한 변경 검토 보고임.

공사개요

○ 위    치 : 서초구 방배동 방배역 ~ 서초동 서초역(대법원 앞)

○ 규    모 : 도로개설 폭 40m(왕복 6~8차로), 연장 1.28㎞(터널 355m)

○ 공사기간 : '15.10 ~ '19. 1

○ 도 급 비 : 44,764백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 롯데건설(주) / ㈜제일엔지니어링

보고내용

○ 현재 설계된 수직벽숏크리트 타설 물량이 관련규정과 부합하지 않아 변경 설계가 필요함

- 가설공사표준시방서(2014, 국토교통부) - 숏크리트 배합 비율

구분	두께(㎜)	28일 설계기준 강도(MPa)	굵은골재 최대치수(㎜)	슬럼프 범위
설계	150	20	10	10
규정	75 이상	21이상	15 이하	-

○ 숏크리트 리바운드량을 10% 적용(설계실무 요령, 국토교통부) 토록 되어 있으나 미반영됨

○ 기 승인된 자재 수급 방법 변경(관급→사급)에 따른 단가 검토가 필요한 실정임

검토내용

○ 관련규정에 부합하도록 숏크리트의 두께, 강도 및 리바운드 량 변경은 적정하다 판단됨(설계사 별도 의견없음)

○ 숏크리트 자재 단가에 대해 시중 물가조사를 하였으나 조사금액이 없어 견적처리 함

- 주요수량 증․감 내역

구분		규격	단위	수 량			비고
				당 초	변 경	증․감(△)
수직벽숏크리트 타설		T=15㎝	㎡	1,399	-	△1,399
		T=7.5㎝	㎡	-	1,399	1,399
숏크리트	사급	13-21-10	㎥	-	119	119
	관급	10-20-10	㎥	210	-	△210

- 공사비 증․감                                              (단위 : 백만원)

구분	규격	당 초	변 경	증․감(△)	비고
수직벽숏크리트 타설	T=15㎝	7	-	△7
	T=7.5㎝	-	3	3
숏크리트	13-21-10	-	15	15
도 급 비		7	18	11
관급자재비	10-20-10	18	-	△18
계		25	18	△7

건설사업관리단 의견

○ 관련규정에 따라 숏크리트 타설 방법 및 단가 변경은 적정하다 판단됨

○ 계약상대자간(발주청, 도급사) 신규비목에 대한 단가를 성실히 협의하였으나 원만한 협의가 이루어지지 않아 강제협의율 적용(85.73%)

보고자 의견

○ 건설사업관리 검토의견이 적절하다 판단되므로 실정보고사항을 승인처리 하고

○ 원활한 공정관리를 위해 선 조치 후 설계변경 처리하고자 함

붙임  건설사업관리 검토의견서 1부.  끝.