문서번호	공원운영과-15546
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
우장명	장길아	문근식	09/28 오진완
협 조
	시설과장		임병국

서서울호수공원 목재데크 도색 정비계획

2016. 9

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

서서울호수공원 목재데크 도색 정비계획

공원 내 목재 데크의 색 바램이 있어, 도색 및 정비를 하여

내구성을 강화하여 보다 쾌적한 공원환경 조성.

	추 진 배 경

○ 공원녹지정책과-13554(2016.9.2)호

- 2016.8.25. 서서울호수공원 방문 시 푸른도시국장 지시사항

- 목재 데크는 전반적으로 오일스테인 도색 필요

○ 서부공원녹지사업소 공원이용만족도 조사계획(2016.6.27.)에 따른 공원이용 만족도 향상에 기여함.

	목재데크 현황

○ 목재데크 면적 : 총 8개소 8,351㎡

○ 구역별 면적

구분	목재데크	세부위치	면적 (㎡)	추정예산 (천원)	비고
	총 계		8,351	59,100
A 구역	몬드리안정원	상부(하늘로)	1,615	13,600	•설계 및 공사 발주는 시설과에 의뢰 •작업하기가 복잡하고 일부구간은 위험함.
	몬드리안정원	하부(미디어벽천)	2,713	22,000
	옥상정원	관리사무소 상부	640	5,400
	소 계		4,968	41,000
B 구역	문화데크광장	관리사무소 앞	2,021	10,700	•서서울호수공원 자체도색 •소요예산 : 오일스테인 구매비 •산출기초 : 3,383㎡÷1.694㎡ /1ℓ* × 8,937.5원)
	어린이놀이터	모래장 주변	227	1,200
	호수전망대	호수 주변 2개소	227	1,200
	열린마당	농구장~약수터	827	4,500
	산자락공원	쉼터	81	500
	소 계		3,383	18,100

* 16.9.26 문화데크광장(244㎡) 도색 시 오일스테인 9통(16ℓ) 소요(1.694㎡/1ℓ)

* 목재데크가 건조하고 노후화되어 오일스테인 양이 배 이상 소요됨(보통 4~6㎡ /1ℓ)

√2016. 9. 5 견적의뢰 결과, 도색 견적업체‘동아데크’

견적금액 165,000천원(목재면2회, 바탕처리)임. 」

○ 목재데크 현황사진

<문화데크광장>	<몬드리안정원>	<옥상정원>

	정비계획

○ 정비대상 : 8개소 목재데크

○ 정비기간 : 2016. 9. 26 ~ 11.20

○ 정비내용 : 목재데크 오일스테인 도색

- A구역(시설과 공사발주) : 몬드리안정원 등 4,968㎡(도장 1회칠)

- B구역(자체도색) : 문화데크광장 등 3,383㎡(재료구매 후 도색)

※ 과업 물량에 대해 도색업체 견적결과, 165백만원이나, 상부 ․ 정원 등           작업곤란 구간 등은 전문업체에서 , 나머지는 자체 인력활용 작업으로 예산절감 추진

○ 소요 예산 : 63,600천원

구 분	추정 예산	예 산 과 목
A구역	41,000천원	서부공원녹지사업소 운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비
B구역	18,100천원	서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 재료비 ※ 오일스테인(기와진회색 ) 구매 비용
	4,500천원	※ 안전화 등 작업용구 구매 비용

	추 진 일 정

○ 2016.9.29. : 시설과 목재데크 도색공사 요청

○ 2016.9.26. ~ 11월중 : 재료 구매 후 자체인력 활용 도색

	행 정 사 항

○ 시설과 : 목재데크 도색공사 발주 (예산범위내 자체 설계)

○ 공원운영과(서서울호수공원) : 자체 도색 및 전체 유지관리.

○ 장기간 오일스테인링 작업에 따른 작업인력 안전화 구입 등 작업장비 구입 및 작업도중 안전관리 철저. 끝.