문서번호	도로보수과-9516
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		代이상하	09/28 한동근
협조
	주무관		이상하

2016년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사

예산집행잔액 사용계획 검토 보고

2016.  09. 27(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사

예산집행 잔액사용 계획 검토 보고

2016년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사(연간단가) 시행 중 민원사항 증가 등에 따른 필요예산 부족분에 대하여 낙찰차액을 사용하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부예규 제26호,2013.07.29)

○ 2015년 교통안전시설 예산 집행 철저(교통운영과-17116,2015.09.03.)

- 불용예산이 최소화 될 수 있도록 예산집행 철저.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2016. 02. 18 ~ 2016. 12. 31

○ 계약금액 : 83,414,500원

○ 시 공 사 : (주)토형이엔시 대표 김용훈

○ 공사규모

- 시선유도표시 설치 및 철거   2개

- 갈매기표지 설치 및 철거     6개

- 도로반사경 설치 및 철거     3개

- 시선유도봉 설치 및 철거  298개

- 도로표지병 설치 및 철거     5개

- 무단횡단금지시설 세척  5,901㎡

- 시선유도봉 세척        1,001개

- 중앙분리대 설치       71경간 등

□ 예산집행 잔액 사용계획

○ 교통안전 부속물 예산집행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예산 배정액	원인행위액(집행액)		낙찰차액	비 고
		도급비	관급비
교통안전 도로부속물	100,000	66,216	24,934	8,850
도로교통 소통개선사업	60,370	17,198	24,329		집행잔액 감 배정

- 상기 공사시행 중 기 작업물량이 공사계약 금액에 근접할 뿐만 아니라, 추가로 발생하는 민원 등에 따른 필요예산 부족으로 교통안전부속물 유지관리에 어려움이 있음.

- 해당 사업의 낙찰차액을 교통안전 사고예방을 위한 시설물 유지관리 및 민원사항 등의 처리에 소요되는 공사비로 사용코자 함.

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 낙찰차액에 대하여 설계변경을 시행하여 교통안전부속물 유지관리에 만전을 기하고자 함.  끝.