급수공사 연기보고

주무관	주무관	시설관리과장		결재
김태규	한상근	09/28 이경재
협 조	주무관		최경연
	주무관		유형근

문서번호 :	시설관리과-29139

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2016. 9. 28.

복 명 자 :     지방시설주사보  유형근

지방시설서기보  김태규

공사현황

❍ 공 사 명 : 2016 정릉동등 10개동 상수도공사

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
개량-7	종암동 3-340호외 4개소	2016.05.11. ~2016.09.26.	2016.10.20.	공사지역 장기주차로 작업불가
개량-30	정릉동 780외 3개소	2016.06.10. ~2016.09.26.	2016.10.20.	공사지역 장기주차로 작업불가
개량-32	동소문동1가 140-75등 3개소	2016.06.10. ~2016.09.26.	2016.10.20.	공사지역 적치물로 작업불가
개량-37	정릉동 254-3	2016.06.18. ~2016.09.26.	2016.10.20.	공사지역 적치물로 작업불가
개량-84	하월곡동 22	2016.06.30. ~2016.09.27.	2016.10.31.	공사지역 적치물로 작업불가
신설-72	종암동 83-3	2016.09.03. ~2016.09.26.	2016.10.20.	공사지역 적치물로 작업불가

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 작업이 불가하여 급수공사 가능시까지 작업연기 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(수요가 연기

요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.