문서번호	기전설비과-8153
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		서대훈	09/28 구자훈
협조

전동기제어반 납품기한 연장계획 보고

2016. 9.

생   산   부

【기전설비과】

- 뚝도 농축조 증설 및 개량공사 -

전동기제어반 납품기한 연장계획 보고

우리 본부에서 추진중인 뚝도 농축조 증설 및 개량공사의 공동구 등 토목구조물 공사 지연으로 “전동기제어반 제작구매설치”건의 현장조작반 설치가 불가능함에 따라  납품기한을 아래와 같이 연장하고자 함.

□ 사업현황

◯ 건   명 : 뚝도 농축조 증설 및 개량공사 전동기제어반 제작구매 설치

◯ 사업개요

- 전동기 제어반 제작설치 1면

- 전압반 개량 및 신설 각1면

- 현장조작반 제작설치 6면

◯ 계약기간 : 2016.06.13.~2016.09.30.

◯ 계약금액 : 금58,050,000원

◯ 계 약 자 : 주식회사 나산전기산업 (대표 : 배종훈)

□ 변경내용 및 사유

◯ 공동구 등 토목구조물 공사 지연으로 현장조작반 설치가 불가능하여  납품기한 연장이 필요함.

◯ 납품기한 연장계획  당초 : 2016.06.13.~2016.09.30.

변경 : 2016.06.13.~2016.12.31.(92일 증)

□ 행정사항

◯ 계약업체 및 재무회계과에 관련사항을 통보하여 사업이 원활이 추진될 수 있도록 조치하고,

◯ 이미 납품 설치된 전동기제어반 등에 대해서는 계약업체의 기성금 청구가 있을 경우 관련 규정에 따라 처리코자 함.  끝.