함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경 계약 체결 (뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물 처리 용역)

1. 생산관리과-13461(2016. 9. 22.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물 처리 용역’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약건명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리 용역

나. 계약업체 : ㈜목화산업

다. 계약금액 : 184,272,890원

라. 변경내용 : 계약금액 변경

구 분	당초	변경	비 고
계약금액	184,272,890원	237,699,000원	증 53,426,110원

마. 변경 사유 : 설계수량 변경에 따른 폐기물 처리 물량 변경

따로붙임 : 변경계약 합의서 및 내역서 각 1부. 끝

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	09/28 代조두업
협조자
시행	재무회계과-14001	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)