투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	연구지원부장
(경유)
제 목	생물안전3등급(BL3)연구시설 인증용역 기한 연장 요청

1. 연구지원부-4731(2016.4.8.)호 및 축산물부-4379(2016.4.5.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 진행중인 생물안전3등급(BL3)연구시설 인증용역이 누전으로 인한 제어시스템 손상으로 아래와 같이 수리 기간이 추가 소요됨에

따라 계약기한 연장을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 생물안전3등급(BL3) 연구시설 인증 용역

나. 계약금액 : 금35,400,000원(금삼천오백사십만원)

다. 계약일자 : 2016. 04. 08.

라. 착수일자 : 2016. 04. 08.

마. 완료기한 : 2016. 10. 04.(계약일로부터 180일)

바. 연장기한 : 2016. 12. 14.(기존 완료일로부터 71일 연장)

사. 연장사유 : 누전사고 발생(2016.7.5.)에 따른 제어시스템 손상

수리 완료일(2016.9.13.)까지의 기간 연장.  끝.

	축산물부장
주무관	양윤모		동물방역팀장	김두환		축산물부장	09/28 손홍락
협조자
시행	축산물부-13177	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	02-570-3165	/전송	02-570-3206	/		/	대시민공개