문서번호	도로보수과-4694
결재일자	2016.9.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		이상호	09/29 이종엽
협 조
	주무관			홍수종
	주무관			김용면

보행자 무단횡단 교통사고 예방을 위한

도로중앙분리대 설치 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

성동도로사업소

(도로보수과)

보행자 무단횡단 교통사고 예방을 위한

도로중앙분리대 설치 추진계획 보고

노약자 등 보행자 무단횡단이 잦은 성동지하차도입구에서 무학여고 사거리 구간에 조속히 도로중앙분리대를 설치하여 교통사고로부터 소중한 시민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 추진근거

❍ 중앙분리대 정비 요청(성동구 교통행정과-4323, ‘16.01.28)

❍ 간이중앙분리대 설치요청(성동경찰서 교통과-5185, ‘16.06.28)

□ 위    치 : 성동지하차도 입구 ~무학여고 사거리

❍ 도로중앙분리대 185m 설치

□ 현    황

❍ 무단횡단금지시설 설치 요청(성동경찰서)

- 성동지하차도 입구 주변에 동명자원(고물상)이 위치하여 폐휴지 등을 수립하는 노인분들이 수거된 폐휴지 등이 적재된 리어카를 끌고 사가정로를 무단횡단하는 등 교통사고 위험 상존지역으로 시급히 무단횡단금지시설 설치가 요청됨.

❍ 성동지하차도 입구에서 무학여고 사거리 일부구간 도로재포장 필요

- 무학여고 사거리~ 성동지하차도 입구(시내방향) 및 성동지하차도 입구 ~무학여고 사거리(시외방향) 3차로 구간은 2014년도에서 재포장 완료

- 성동지하차도 입구 ~무학여고 사거리(시외방향) 1~2차로 구간은 2010년 이후 포장정비가 없어 재포장 공사 필요

❍ 간이무단횡단금지시설 철거 필요

- 2008년 이전에 경찰서에서 무단횡단금지시설(플라스틱 간이중앙분리대)를 설치하였으나, 차량매연 등으로 더렵혀지고 규정외 제품으로 유지관리가 안되어 주변환경에 유해한 상황으로

- 보행자 무단횡단으로 인한 교통사고를 예방하고 「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 적합한 안전시설 설치가 시급한 실정임.

□ 추진계획

❍ 간이 무단횡단금지시설 철거 및 도로재포장 공사 실시

- 성동지하차도 입구~무학여고 사거리간 1~2차로 구간은 2010년 이후 포장정비 미실시 구간으로 하반기 「2016년 노후포장도로 정비공사(1구역)」 구간에 포함하여 재포장 실시(포장규모 : B=6m, L=185m, A=11.1a, 소요예산 28,000천원)

- 경찰청에서 설치된 간이무단횡단금지시설은  「2016년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시하여 철거 조치(간이 무단횡단금지시설 33경간, 지주 4개 철거, 소요예산 623,830원 )

❍ 도로중앙분리대 설치에 따른 중앙선 확보를 위한 노면표시 삭선 및

재도색

- 성동지하차도 입구~무학여고 사거리 양방향에 대하여 기존 노면표시 삭선 및 재도색을 통하여 도로중앙분리대 설치를 위한 중앙선 간격

(100cm)을 확보하고자 하며 「2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시하여 노면표시 삭선 및 재도색 실시

❍ 도로중앙분리대 및 단부처리시설 설치

- 철재 중앙분리대(H900×W3000)는 현재 구매 추진중인 중앙분리대 조달구매 계약의뢰(도로보수과-4456, 2016.9. 13)에 포함하여 관급자재를 구매하고자 하며

- 단부처리시설 및 단부는 철재 중앙분리대와 같은 회사제품 중 성능평가를 거쳐 성능이 검증된 제품을 수의계약으로 구매 및 설치하고자 함.

※ 중앙분리대용 방호울타리 단부처리(도로안전시설 설치 및 관리지침, 차량방호 안전시설편)

차량이 방호울타리의 끝 부분을 충돌할 때 차량의 거동이 불안하게 되거나 방호울타리의 단부가 차체를 관통할 수 있으므로 소형차 탑승자를 보호하기 위한 방호울타리와 연결하여 설치하는 충격흡수시설

□ 조치의견

❍ 추진계획에 의거 관급(사급)자재 구매 및 2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가), 2016년 교통및도로부속물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 추진하고 설계변경시 반영하고자 함.

붙임 1. 도로중앙분리대 비교표 1부.

2. 노면표시 현황조사 및 재도색 도면 1부

3. 노면표시 변경(안).   끝.