문서번호	도로포장연구센터-2042
결재일자	2016.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
윤상열		백종은	09/29 한민희
협조	주무관		김태우
	주무관		윤진성

도로포장 상태 조사·분석 및

동공탐사 추진실적 보고(9월3주)

2016. 09

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로포장 상태 조사·분석 및 동공탐사 추진실적 보고

□ 보고일시 : ‘16.09.12(월) ~ 09.23(금)(9월3주)

□ 보고내용

◯ 도로포장 표면상태 조사·분석

구 분			도로포장 상태 조사·분석							비고
			총계획 물량	조사실적		분석실적		잔여 물량	금주 계획
				전주	누계	전주	누계
합계		개소	410	12	387	4	334	23	7
		연장(km)	2,525.5	107.5	2,174.7	68.8	1,759.5	350.8	85
3년주기 전수조사 (3단계-‘16년도)		개소	153	12	130	4	77	23	7
		연장(km)	2,334	107.5	1,983.2 (85.0%)	68.8	1,568 (79.0%)	350.8	85
기 타		개소	214		214		214		조사·분석 완료
		연장(km)	165.6		165.6		165.6
	노후포장 도로정비 구간	개소	171		171		171		결과 통보 (‘16.07.20)
		연장(km)	138		138		138
	굴착복구 시행도로 구간	개소	43		43		43		결과통보 (‘16.04.26)
		연장(km)	27.6		27.6		27.6
장기공용성(LTPP) 구간		개소	43		43		43		조사·분석 완료
		연장(km)	25.9		25.9		25.9
	서울형포장 설계법 구간	개소	23		23		23		조사·분석 완료(09.20)
		연장(km)	11.1		11.1		11.1
	맞춤형 고내구성 구간	개소	7		7		7		조사·분석 완료(09.20)
		연장(km)	5.0		5.0		5.0
	저소음포장 구간	개소	3		3		3		조사·분석 완료(09.20)
		연장(km)	3.7		3.7		3.7
	예방적유지 보수 구간	개소	10		10		10		조사·분석 완료(09.20)
		연장(km)	6.1		6.1		6.1

◯ 동공탐사 조사현황

- 전체현황

연번	구분		계획		탐사수행		동공(개소)			수행율(%)
			연장(㎞)	개소	연장(㎞)	개소	분석	천공	확인	연장	개소
계			200㎞		290㎞		174	60	26	145	111
1	함몰개연성 높은 도로구간	노후하수관	75	100	68	105	47	12	7	90	105
2		지하철	100	31	104	17	47	13	2	104	55
3	요청구간 및 기타		25	-	118	24	20	11	4	472	-
‘15년 시험탐사구간 73km							60	24	13	-	-

※ 민간탐사용역 구간과 121㎞(지하철구간 70㎞, 요청구간 51㎞) 중복

- 세부현황 및 금주계획

연번	구 분			조사·분석
				총계획물량	실 적		잔여물량	금주계획
					전월	누계
1	노후 하수관 구간	조사	개소	100	-	105	-	-
			km	75	-	68	7	-
		분석	개소	-	-	104	1	-
			km	-	-	62	6	-
		천공	개소	47	-	12	35	-
		확인				7	-	-
2	지하철 구간	조사	개소	31	1	17	15	2
			km	100	8	104	4	4
		분석	개소	-	2	17	1	-
			km	-	8	104	9	-
		천공	개소	48	-	13	35	-
		확인			-	2	-	-
3	요청 구간 및 기타	조사	개소	-	-	24	-	-
			km	25	-	118	-	-
		분석	개소	-	-	24	-	-
			km	-	-	118	-	-
		천공	개소	20	-	11	9	-
		확인				4	-	-
‘15년 시험구간		천공	개소	60	-	24	36	-
		확인			-	13	-	-