등록번호

가로환경과-19789

주무관

가로정비팀장

가로환경과장

★안전건설국장

부구청장

등록일자

2016.9.29.

박정미

박상우

류웅걸

이우룡

전결 09/29

황치영

결재일자

2016.9.29.

공개구분

대시민공개

협조

물품보관소 이전 사업예산 명시이월 계획

안전건설국

가로환경과

물품보관소 이전 사업예산 명시이월 계획

가로정비 물품보관소 이전 사업과 관련하여 2016년도에 편성된 사업비의

당해연도 지출이 불가능하여 차기년도 사용을 위해 명시이월 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

조직우

추진근거

당하동 청소차고 대채부지 매입관련 알림 【청소행정과 – 21159(2016.07.11.)】

사업개요

물품보관소 현황

- 위    치 : 인천 서구 당하동 460-4(청소행정과 차고지)

- 규    모 : 대지(1,305㎡, 약 395평)

- 주요시설 : 컨테이너 8개(창고 7, 사무실 1), CCTV(4개소)

추진일정 : 청소행정과 차고지 이전계획 확정일정에 따라 추진

이전대상 : 가로정비 물품보관소 시설 및 수거물품 등

추진내용 : 수거물품 반환 및 매각, 노후시설·물품 대체 구매, 보관소 이전

추진경위

2016. 1. : 청소과 차고지 검단 신도시 개발로 연내 대체부지 확보 이전 예정

2016. 4. : 물품보관소 이전에 따른 이전비 및 물품취득비 추경예산 확보

2016. 7. : 당하동 청소차고 대채부지 매입관련 알림

명시이월 예산

명시이월 예정액 :36,350천원

명시이월 내역

사업명	예산과목		예산액	집행액	잔액 (명시이월)
	세부사업	편성목
물품보관소 이전 및 설치비	가로환경 정비시설물운영	공공운영비	8,550	-	8,550
	자산취득비	자산 및 물품취득비	27,800	-	27,800

명시이월 사유

청소행정과 차고지 대체부지 선정이 지연됨에 따른 물품보관소        이전이 불가능해짐에 따라 당해연도 예산집행의 어려움이 있어       2017년 회계연도로 명시이월하여 사용하고자 함

※ 명시이월 확정 이전에 대체 부지확보 이전시 집행가능

향후계획

2016. 하반기 : 물품보관소 부지 확보 예정

2017. 상반기 : cctv설치 및 이전에 따른 물품 구매 등.  끝.