투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차) 시행[2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-1구역)]

1. 기전과-8775(2016. 9. 2)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 교통신호기공사에 대하여 책임감리사로부터 설계  변경(2차)요청서가 접수되어 검토한 바 적합하여 설계변경을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-1구역)

나. 공사기간 : 2016. 3. 14 ~ 2016. 12. 31

다. 시공업체 : ㈜스타엘브이에스 대표 이준수

라. 공사금액 : 금634,276,850원

마. 설계변경 내용

❍ 공사금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비		634,276,850	634,276,850	-	-
도급비	공급가액	576,615,319	576,615,319	-	-
	부가가치세	57,661,531	57,661,531	-	-
	계	634,276,850	634,276,850	-	-

❍ 설계변경 사유

- 교통심의규제, 노후시설물정비, 긴급민원처리 등으로 1~3차 작업완료에 따른 기성물량 반영하여 설계변경 필요

바. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물 관리,

교통신호기 신설 및 보수, 시설비

붙임 :  1. 설계변경(2차) 방침서 1부.

2. 설계변경(1구역-2차) 요청서(책임감리사) 1부.

3. 설계변경(1구역-2차) 내역서 1부.

4. 합의각서(1구역-2차) 1부.  끝.

★주무관	백윤광		기전과장	이영목		북부도로사업소장	09/02 신응수
협조자	주무관	박정민		계약1팀장	조현
시행	기전과-8781	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개