	남부도로사업소
수신자	기전과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 통보(2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사)

1. 기전과-5070(2016.9.28.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 공사 변경계약건에 대하여 아래와 같이 계약을 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사

나. 변경사항 : 계약금액 변경

다. 변경계약 체결현황

구 분	당 초	변 경	비 고
계 약 자	************ *******	변경사항 없음
계약금액	금97,471,000원	금107,470,000원	증)9,999,000원
공사기간	2016.3.14.~2016.12.31.	변경사항 없음

**************

********************

	관리단속과장
주무관	배은하		관리단속과장	09/29 송재우
협조자	주무관	代배은하
시행	관리단속과-9713	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로145(대림동711번지)	/
전화	3284-5412	/전송	841-6458	/		/	부분공개(7)