투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	용역 완수기한 연기 계약체결 통보(낙산공원 재조성 기본계획 및 기본설계용역)

시설과-7179(2016.09.28.)호와 관련, 다음과 같이 변경계약 조치하였음을 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 낙산공원 재조성 기본계획 및 기본설계용역

나. 계약업체 : 안스디자인 (대표자 : 안영애)

나. 완수기한 연기

- 당  초 : 2015.09.23. ~ 2016.09.30

- 변  경 : 2015.09.23. ~ 2016.10.14

붙임 :  1. 용역변경계약서 각 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	전정아		재무팀장	정금자		공원운영과장	09/29 김준현
협조자
시행	공원운영과-18162	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5933	/전송	02-3783-5929	/	jja70@seoul.go.kr	/	부분공개(6)