문서번호	시설과-7221
결재일자	2016.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	代김영수	김재균	09/29 이용태
협 조

『2016년 남산 및 산하공원 폐기물처리용역』

준공기한 연기 검토보고

2016. 09

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『2016년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역』

남산 및 산하공원시설물 유보수정비(단가계약) 및 장충테니스장

정비공사등 시설물 정비 및 유지관리에 발생되는 폐기물의 신속한   처리를 위하여 준공기한을 연장하고자 보고드림.

준공기한 연기 검토보고

Ⅰ		용 역 개 요

용 역 명 : 2016년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역

용역기간 : 2016.05.13.~2016.06.30.

도 급 액 : 34,556,000원

도 급 자 : (유)도성개발  윤 칠 중,  ㈜도성개발  박 진 영

Ⅱ		준공기한 연기

연기기간

당 초 : ‘16.05.13. ~ ’16.09.30.

변 경 : ‘16.05.13. ~ ’16.11.30.

연기사유 :

『2016년 남산 및 산하공원 시설물 보수,정비공사(단가계약)』및

『장충테니스장 정비사업』등 공원내 시설물 정비시 발생되는 폐기물의 신속한 처리를 위하여 준공기간을 연기하고자 함(연기기간 2개월)

지체상금 부과여부 검토

연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

지체상금 : 미부과

Ⅲ		보 고 의 견

상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

첨 부 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.