투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	계약변경(3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사-계약기한 변경) 의뢰

1. 관리과-6286(20165.05.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 시행중인『3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량                 공사』사업의 계약내용중 계약기한 변경요청 하오니 처리하여 주시기                 바랍니다.

가. 건    명 : 제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사

나. 계약금액 : 금260,464,200(금이억육천사십육만사천이백원)

다. 계 약 자 : ㈜타셋(대표 : 이동주)

라. 변경내역(계약기한 변경)

구분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기한	2016.10.12	2016.12.14.

마. 변경사유

- 종침 오니수집기 조작반 정비사업(전기분야)연계한 시운전 필요

- 종침 오니수집기 조작반 정비사업 납품기한 : 2016.12.14.

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,       중랑물재생센터 수처리 유지보수, 시설비.

첨 부 : 1. 계약기한 연장 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	시설보수과장
주무관	진관용		시설보수과장	09/29 윤승범
협조자
시행	시설보수과-5244	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2553	/전송	02)2211-2579	/	imsangli@seoul.go.kr	/	대시민공개