함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결 (뚝도 농축조 증설 공사 전공기제어반 제작구매)

1. 기전설비과-7398(2016. 8. 26.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘뚝도 농축조 증설 공사 전동기제어반 제작구매 계약’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약건명 : 뚝도 농축조 등설 및 개량공사 전동기제어반

나. 계약업체 : 나산전기산업

다. 계약금액 : 58,050,000원

라. 변경내용 : 계약기간 변경

구 분	당초	변경	비 고
계약기간	2016.6.13.~ 2016.9.30.	2016.6.13.~ 2016.12.31.	증 92일

마. 변경 사유 : 우리본부 귀책사유임

- 공동구 등 토목구조물 공사 지연으로 현장조작반 설치가 불가능하여 납품기한을 연장함

따로붙임 : 변경계약 합의서 및 내역서 각 1부. 끝

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	09/29 代조두업
협조자
시행	재무회계과-14101	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)