포장복구공사 준공연기 보고서

주무관	급수운영과장			결재
박종대	09/30 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-24368

2016년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속) 감독업무 수행중 준공기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 9. 30

보고자 : *********************

공사현황

공사명 : 2016년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사

도급자 :*************

작업지시 현황

작업지시번호	위 치	공사종별	공사기간	비고
광진구-312	**********	급수공사	‘16.09.14~’16.09.30

보고내용

준공기한 연기사유 : 공사위치에 연락처가 없는 장기주차 차량이 있어 포장복구가 불가한 상태임.

보고자 의견

위와같은 실정으로 포장복구 작업을 할 수 있는 여건이 형성될 때까지 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

-  당초 공사기간 : ‘16.09.14. ~ ’16.09.30.

-  변경 공사기간 : ‘16.09.14. ~ ’16.10.30.

따로붙임 : 준공기한 연기요청서 1부.  끝.