문서번호	녹지관리과-9253
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
안순호	박병구	09/30 김윤철
협 조

2016 녹색자금 나눔숲 조성사업 -관급자재 변경 계획

2016. 9.

2016년 녹색자금나눔숲 조성사업

관급 자재 변경 계획

「녹색자금 나눔숲 조성공사」와 관련하여 원할한 공급을 위해 관급자재를 변경 조정하고자 아래와 같이 검토 하고 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015 녹색자금 나눔숲 조성사업

○ 대 상 지 : 효정 비전타운

○ 공사기간 : 2016. 8. 26~ 2016. 11. 8

○ 도 급 액 :  효정비전타운- 94,811천원

○ 도 급 자 :  정나라 건설(주)

□ 관급자재 변경 내역

▸ 상록잔디 패랭이 관급자재 변경

- 녹지관리과-8500(2016.8.5.)호로 기요청 하였으나, 수량 부족으로 납품 불가하여 변경

구 분	관 급 자 재 변 경 내 용
관급자재	○ 관급자재 - 상록잔디패랭이 매트 ⇒ 꽃잔디 매트 - 당초(단가) 15,200원 ⇒ 변경 10,270원 ○ 금액 - 수량 : 200매 - 당초 : 3,040,000원 ⇒ 변경 2,054,000원(감 986,000)

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 실정에 맞게 관급 자재를 변경 조정 하고자 함.