투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기요청

『개포디지털혁신파크 태양광발전시설 기초보강 및 전기배선공사』 시행과 관련 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 개포디지털혁신파크 태양광발전시설 기초보강 및

전기배선공사

2. 도 급 액 : 금10,480,000원(금액변경 없음)

3. 공사기간 : 2016.9.9 ~ 2016.9.30

4. 도 급 자 : (주) 케이디파워 대표 김임배

5. 용역 준공기한 연기

- 당초 : 2016.9.9 ~ 2016.9.30

- 변경 : 2016.9.9 ~ 2016.10.14

붙 임 : 1) 방침서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설팀장	임록화		시설과장	09/30 代임록화
협조자
시행	시설과-5289	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	대시민공개