문서번호	설비부-15160
결재일자	2016.9.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	건축설비과장	설비부장
이호완	김영수	09/30 권오식

『시립영보정신요양원 증축및리모델링 기계설비공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

『시립영보정신요양원 증축및리모델링 기계설비공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

『시립영보정신요양원 증축및리모델링 기계설비공사』관련 건설사업관리단이 요청한 설계변경 및 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

관련근거

□ 건설사업관리단 기계설비 설계변경 요청(용영설-02호, 2016.09.28.)

공사개요

□ 위    치 : 경기 용인시 처인구 이동면 묵리 464

□ 공사규모

- 연면적 : 14,475㎡(지하1, 지상4)

- 주설비 : 냉난방, 급수급탕, 위생설비, 소방설비, 자동제어설비 등

□ 공사기간 : 2016.02.22. ~2017.02.21

□ 도 급 비 : 금530,694천원

□ 시 공 사 : 주)삼양이엔씨 대표 유금재

□ 감 리 사 : 주)영지영섭종합건축사사무소 대표 황영섭

설계변경 사항

□ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분	계 약 금 액			비 고
	당 초	변 경	증·감
공급가액	482,449,883	524,492,728	42,042,845
부 가 세	48,244,987	52,449,272	4,204,285
도 급 비	530,694,870	576,892,000	46,197,130

□ 설계변경 사유

- 현장여건 반영으로 설계물량 증․감.

□ 설계변경 내용

- 리모델링현장 건축구조보강공사에 따른 철거, 재시공 물량 발생 및 사용자의 요구사항 반영으로 46,197천원 증액.

준공기한 연기

- 당 초 : 2016.02.22. ~2017.02.21.

- 변 경 : 2016.02.22. ~2017.03.21.

□ 준공기한 연기 사유

- 선행공정 지연 및 공사기간 연장에 따른 공정관리.

□ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

보고자 검토의견

□ 감리검토 의견과 같이 현장여건 반영으로 철거, 재시공 물량이 발생되었고, 사용자(영보정신요양원장)의 요구사항을 예산범위내 반영함이 타당함.

□ 건축공사의 준공기한이 연기되어 이에 맞추어 준공기한을 연기하고자 함.

□ 설계변경 및 준공기한 연기에 대해 계약부서(본청 재무과)에 의뢰코자 함.

붙 임 :  1. 감리검토보고 - 1부.

2. 합의서 및 설계변경 내역서 - 각1부. 끝.