등록번호

사회복지과-39093

주무관

노인복지팀장

사회복지과장

복지환경국장

부구청장

등록일자

2016.9.30.

박미영

조현우

김화전

안춘자

09/30

황치영

결재일자

2016.9.30.

공개구분

대시민공개

협조

★예산팀장

박이만

기획예산과장

권순우

- 신당5동 소규모 노인복지관 건립 - 사업예산 명시이월 계획

복지환경국

사회복지과

- 신당5동 소규모 노인복지관 건립 - 사업예산 명시이월 계획

신당5동 소규모 노인복지관 건립과 관련하여 2016년도에 편성된 사업비의 당해연도 지출이 어려워 차기년도 사용을 위해 명시이월 하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 신당5동 다산어린이공원 인근

❍ 규    모 : 대지 379.4㎡, 연면적 840㎡(지하1층/지상4층)

❍ 총사업비 : 5,080백만원(구비 4,080백만원, 시비 1,000백만원)

❍ 추진기간  : 2015년 ~ 2018년

❍ 시설배치

층 수	면 적(㎡)	용 도	비 고
총 계	840㎡
지하1층	258㎡(78평)	주차장, 기계실, 전기실
지상1층	100㎡(30평)	경로당	신당5동경로당 입주
지상2층	176㎡(53평)	프로그램실
지상3층	156㎡(47평)	커뮤니티 공간, 교육장, 회의실
지상4층	150㎡(46평)	사무실, 상담실

Ⅱ		추진경위

❍ 2014. 9.22.   소규모 노인복지관 건립계획 구청장 방침수립

❍ 2016. 5.19.   서울시 투자심사 완료(가결)

❍ 2016. 6~7월  매입대상 토지주 면담, 통장회 대상 사업설명 등

❍ 2016. 7.21.   도시계획시설 입안 결정 의뢰(사회복지과→도심재생과)

❍ 2016. 9. 6.   도시계획위원회 심의 보류

Ⅲ		명시이월 예산

❍ 명시이월 예정액 : 1,810,000천원(시설비 및 부대비<구비>)

❍ 명시이월 내역

(단위 : 천원)

사업명	2016회계년도					비고
	예산과목		예산액	집행액	잔 액 (명시이월)
	세부사업	편성목
신당5동 소규모 노인복지센터 건립	신당5동 소규모 노인복지센터 건립	시설비 및 부대비	1,810,000	0	1,810,000

Ⅳ		명시이월 사유

❍ 신당5동 소규모 노인복지관 건립 추진 중 사업대상부지 도시계획시설결정이 지연됨에 따라 토지 보상이 당해연도에 완료 어려움

Ⅴ		향후 추진계획

❍ 2016.10월  도시계획시설 입안 결정(도심재생과)

❍ 2016.11월  도시계획시설사업 시행 인가고시

❍ 2016.11월  사업대상 부지 보상 착수(건설관리과)

❍ 2017. 4월  공사발주