함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결 안내(뚝도 배출수처리장 전동기 제어반 구매)

1. 기전설비과-8156(2016. 9. 28.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘뚝도 배출수처리장 전동기 제어반 구매 계약’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 뚝도 배출수처리장 전동기 제어반 구매

나. 계약업체 : ㈜나전전기산업

다. 계약금액 : 58,050,000원

라. 변경내용 : 계약기간 변경

구 분	당초	변경	비 고
계약기간	2016.6.13.~ 2016.9.30.	2016.6.13.~ 2016.12.31.	증 92일

마. 변경 사유

- 공동구 등 토목 구조물 공사 지연으로 현장조작반 설치가 불가능하여 납품 기한 연장이 필요함

따로붙임 : 변경 계약서 1부. 끝.

	재무회계과장
주무관	황한범		재무회계과장	09/30 박병식
협조자
시행	재무회계과-14169	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	대시민공개