문서번호	정보기획담당관-15311
결재일자	2016.9.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인터넷정책팀장	정보기획담당관
권혜진		허정미	09/30 이기완
협조
	주무관		강민석

서울시홈페이지 통합기반시스템 고도화 용역

월간업무보고('16.8월)

2016. 9

정보기획담당관

- 서울시홈페이지 통합기반시스템 고도화 용역 -

월간업무보고('16.8월)

「서울시 홈페이지 통합기반시스템 고도화 용역」사업 추진과 관련하여 ‘16년 8월 추진 실적 및 차월 계획을 보고함

1.

사업개요

사 업 명 : 서울시홈페이지 통합기반시스템 고도화 용역

사업기간 : ‘16.7.4 ~ 12.31 (사업수행 : ㈜코난테크놀로지 컨소시엄）

사업내용

○ 서울시 통합검색 연계 확대 및 기능 고도화

○ 유무선에 최적화된 통합게시판 재구축

○ 서울시 홈페이지 분야별 주요콘텐츠 맵 구성

○ 서울시홈페이지 표준 GNB 개발

○ 분야별 홈페이지 및 모바일서울 추천서비스 시범운영

2.

추진실적

추진기간 : 2016.8.1.~8.31

진척현황 : 계획 30% / 실적 28%

업무 구분	단계	진척률(%)		비 고
		계획	실적
통합검색고도화	분석	25%	22%
검색ISP	분석	51%	48%
통합게시판 재구축	분석	24%	22%
주요 콘텐츠 맵 구성	분석	25%	20%
표준 GNB 개발	분석	27%	23%
추천서비스 적용	분석	30%	30%

주요추진내용

○ 현행 시스템 분석

- 통합검색시스템 색인 DB, 수집쿼리, UI 분석

- 통합게시판 연계시스템 분석 등

- GNB 적용 사이트 현황 분석 및 시사점 도출

○ 시스템 설계

- 검색 카테고리 설계, 검색 화면 설계

- 분야별 콘텐츠 맵 구성방안 설계

○ 추천서비스 적용 대상 스크립트 적용

- 분야별, 모바일 스크립트 삽입 및 데이터 수집 모니터링

차월계획

○ 통합검색화면, 관리도구, API 구조 설계

○ 통합검색 운영 업무프로세스 정립, 개선전략 수립 및 도출

○ 통합게시판 시스템 사용자 화면 설계

○ 서울시 GNB 미적용 현황 분석

○ 추천서비스 적용 대상 로그 데이터 검증

붙임 : 1. 월간업무보고서(8월) 1부.

2. 주간업무보고서(8월) 각 1부.

3. 산출물(8월) 각1부.  끝.