투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	변경계약(공사) 체결 안내-제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사

시설보수과-5226(2016.09.28)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결되었음을 알리오니, 감독업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

1. 계약건명 : 제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사

2. 계약총액 : 금260,464,200월(금이억육천사십육만사천이백원)

3. 계 약 일 : 2015년  05월 16일

4. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
기간변경	2016.10.12	2016.12.14	증) 63일

5. 계약사유 : 종침오니수집기 조작반 정비사업(전기분야)연계한 시운전 필요

6. 계약업체 : ㈜타셋 (대표:이동주)

********6675-4000)

붙임 : 공사변경계약체결 통보서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	정상진		관리과장	한병연		중랑물재생센터소장	09/30 이성재
협조자
시행	관리과-12217	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	jungsj0318@seoul.go.kr	/	부분공개(6)