투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	축산물부장(동물방역팀장)
(경유)
제 목	변경계약체결알림[생물안전3등급(BL3) 연구시설 인증 용역]

1. 축산물부-13177(2016.9.28.)호와 관련입니다.

2. 『생물안전3등급(BL3) 연구시설 인증 용역』 기간 연장에 따라 아래와 같이 변경계약이 체결되었음 알려드립니다.

가. 건     명 : 생물안전3등급(BL3) 연구시설 인증 용역

나. 계약방법 : 수의계약(2회 유찰 후 1인수의)

다. 계약금액 : 금35,400,000원(금삼천오백사십만원)

라. 변경내용 : 용역기간 연장

- 당초준공일 : 2016. 10. 4.

- 변경준공일 : 2016. 12. 14(71일 연장)

마. 변경계약일자 : 2016. 9. 29.

바. 변경계약사유 : 누전으로 인해 손상된 제어시스템 수리기간 만큼 연장

사. 계약상대자

1) 주     소 : 서울특별시 강남구 영동대로 719

2) 상     호 : 주식회사 나라컨트롤

3) 대  표  자 : 주영덕

붙     임 : 1. 변경계약서 1부

2. 변경계약요청 공문 1부.  끝.

	연구지원부장
주무관	김지영		경리팀장	최동철		연구지원부장	09/30 이형우
협조자
시행	연구지원부-13976	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화	02-570-3341	/전송	02-570-3320	/	pyxis520@seoul.go.kr	/	대시민공개