투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지역난방 매달기 변경 실정보고건 재검토 요청)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설탄트

2.작 성 일 자 : 2016-10-04 17:10:27

3.지 시 내 용:

1) 대한(하남)제16-509호(2016.9.30.)와 관련입니다.

2) 우리본부에서 추진중인 「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사」와 관련하여 본선4-1구간에 매설되어 있는 지역난방관 매달기공법을 변경코자 실정보고한 사항에 대하여 아래와 같은 내용으로 재검토하여 주기시 바랍니다.

○ 매달기공법 변경사항

- 설계도서에 제시된 매달기 공법으로도 가능할것으로 사료되는 바 재검토

○ 적용단가

- 설계도서 및 내역서에 매달기가 반영되어 있으나, 지역난방에서 제시하는 매달기 형식이 다른 사항인바,  단가적용은 낙찰가를 적용함이 타당할것으로 사료됨.  끝.

주무관							임경태			토목1과장					10/04 윤방식
협조자				주무관						이경훈
시행			도시철도토목부-12355									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		3708-8785						/전송			3708-8756					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개