문서번호	치수과-15222
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
김택		성규상		박상준		10/04 김재겸
협조
	기획예산과장		이윤영
	예산팀장		이정희

★ ◉

「2016년 지하주택 침수방지시설 설치공사」 집행잔액 사용계획 보고

2016. 10.

(치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( 시기금 및 구기금 50:50 분담사업 ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2016년 지하주택 침수방지시설 설치공사

집행잔액 사용계획 보고

『2016 지하주택 침수방지시설 설치공사』 사업진행 중 당초 물량을 초과  하여 신청가구가 접수되어 본 공사 집행잔액을 사용하여 정비하고자 함

▢ 공사개요

❍ 사 업 명: 2016년 지하주택 침수방지시설 설치공사

❍ 사업기간: 2016.  3. 24. ~ 11. 22.

❍ 공사개요: 400가구(역지변 659개, 물막이판 739m)

❍ 도 급 자: 성보기건(주) (대표 한경수)

❍ 사업비 구분(시비50%, 구비50%)

【 사업비 현황 】

총사업비	도 급 비	집행잔액	비고
400,000,000	339,514,070	60,485,930

▢ 보고내용

❍ 본 공사는 우기시 우수의 유입, 하수역류 등을 차단하여 침수피해를 예방 하기 위한 사업으로써, 현재 저지대 지하주택의 건축주로부터 침수방지시설 설치요청이 추가로 52건이 접수된 상태임.

❍ 조사 결과 추가 설치 요청가구는 지하주택 침수방지 설치 여건에 적합하므로  본 공사의 집행잔액을 사용하여 설치코자함.

【 추가물량 및 소요금액 】

설 치 물량			소 요 금 액(원)
계	설치완료	추가물량	계	설치완료	추가물량
341가구	289가구	52가구	400,000,000	339,514,070	60,485,930

▢ 조치계획

❍ 추가물량 52가구에 대하여는 본 공사의 도급자로 하여금 작업지시하여 설치토록 하고 추후 설계변경 정산하고자 함

※ 예산과목(50:50 매칭사업)

- 하천관리과,수자원, 치수및하천관리, 치수사업, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비및부대비, 시설비 – 시기금(200,000천 원)

- 치수과, 재난예방·민방위, 재해및재난복구 능력강화, 재난관리, 재난관리재난관리기금), 시설비및부대비, 시설비 – 구기금(200,000천 원)

붙임: 1. 제9차 작업지시 내역서 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.