문서번호	도로보수과-9706
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		10/04 이규철
협 조
	주무관		이상하

2016년 도로교통소통개선사업

시행계획 보고(동도중학교)

2016.  10. 04.(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 도로교통소통개선사업

시행계획 보고(동도중학교)

마포구 백범로 동도중학교 앞 교통 불편지점에 대하여 좌회전·유턴허용 등 교통안전시설을 개선하여 교통소통을 원활히 도모하기 위한 개선사업을 시행코자 함.

□ 관련근거

○ 2016년 도로교통소통개선사업 예산 재배정 통보(동도중학교 앞)

- 교통운영과-18513(2016.09.30.) 재배정액 : 9,577천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 도로교통소통개선사업

○ 위    치 : 마포구 백범로 동도중학교 앞

○ 총사업비 : 9,527천원

○ 개선내용 : 좌회전 허용, 유턴 허용, 노면표시 개선 등

○ 사업구간 위치도 및 개선도

위 치 도	개 선 도
공덕역 대흥역 개선지점

□ 공사내용

○ 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 4,991천원(관급자재포함)

- 노면표시 도색 : 566m

- 노면표시 제거 : 415m

○ 관급자재(차선분리대) 구매 설치 : 4,536천원(현장설치도)

- 무단횡단금지시설 설치 및 철거 : 19경간(약 50m)

※ 교통안전표지판은 기전과에서 별도 시행예정.

□ 조치계획

○ 교통개선공사 발주 시 업체선정까지 기간소요 등으로 별도 발주 시행은 곤란하여 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사에 포함하여 시행하고자 함.

- 공사기간 : 2016. 09. 30. ~ 2016. 10. 30.

- 필요금액 : 약 4,297천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 관급자재 사용검토

- 노면표시 도색공사에 사용되는 특수페인트는 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사의 납품 계약된 수량 사용 후 정산.

- 무단횡단금지시설은 조달구매 의뢰하여 설치 완료하고 추후 정산.

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산배정액	노면표시		무단횡단 금지시설	집행잔액
		도급비	관급비
도로교통 소통개선사업	9,577	4,297	694	4,536	50

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 2016. 10. 04 : 개선공사 작업지시 및 공사 시행.

○ 2016. 10. 30 : 개선공사 완료

○ 2016. 11. 10 : 설계변경 정산 및 개선공사 결과보고

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 설계도면 1부.

3. 관련 문서 1부.  끝.