투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재(식물매트) 변경 계약요청[2016년 한강숲(망원) 조성 공사]

우리본부에서 시행하고 있는『2016년 한강숲(망원) 조성 공사』에 소요되는 관급자재(식물매트) 수량 및 납품기한을 아래와 같이 변경 계약 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 변경계약요청

○ 계약번호 : 00145052301

납품요구번호	물품식별번호	품명 (규격)	단위	수량 변경			비고
				당초	변경	증감
12-16-1-38143-00	22675852	구절초 식물매트	매	270	290	증20
12-16-1-38143-00	22675863	비비추 식물매트	매	432	369	감63
12-16-1-38143-00	22675865	샤스타데이지 식물매트	매	1998	2,462	증464
12-16-1-38143-00	22675867	수호초 식물매트	매	378	215	감163
12-16-1-38143-00	22675868	쑥부쟁이 식물매트	매	378	209	감169
12-16-1-38143-00	22675869	옥잠화 식물매트	매	486	273	감213
12-16-1-38143-00	22675880	벌개미취 식물매트	매	324	224	감100

○ 납품기한

- 당초 : 2016. 10. 14

- 변경 : 2016. 11. 30.

나. 변경사유 : 식물매트 장소 변경에 따른 물량 변경 및 식재부적기인 하절기 공사중지에 따른 식재 공정이 늦어짐.  끝.

	기반시설과장
주무관	정상범		기반시설과장	10/04 박일연
협조자
시행	기반시설과-4004	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부(성수동1가)	/
전화	02-3780-0668	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개