문서번호	공간정보과-7700
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	10/04 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

용역사간 교차점검(1차) 결과보고

2016. 10.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

용역사간 교차점검(1차) 결과보고

『2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』탐사 및 측량 성과물 정확도 검증을 위해 실시한 용역사간 교차점검(1차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

관련방침

❍「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한 성과심사 현장

입회 및 수행사 교차 점검계획(1차) 공간정보과-7248호(2016.9.9.)

점검기간 : 2016. 9. 26. ~ 9. 30.(5일간)

점검대상 : 공공측량성과심사(1차) 신청한 탐사성과(172㎞)

점검방법

❍ 용역 수행사간 상호 교차 탐사/측량, 성과 일치여부 확인

(서북 → 서남 → 동남 → 서북)

결과요약

❍ 공공측량성과심사 규정 성과적합 기준(80% 이상)에 “만족”

(단위 : %)

구 분		서 북			서 남		동 남
		중부	서부	북부	강서	남부	동부	강남	강동
일치율	평면	97.8	100	100	100	100	97.2	98.8	97.5
	심도	100	95.8	97.1	98.6	100	100	100	100

Ⅱ		점검세부

점검 세부사항

❍ 점검대상 : 성과심사(1차) 기존관 신청물량(172㎞) 중

사업소별 점검물량 2%(3.8㎞) 선정

※ 공공측량성과심사 현지심사 물량 기준(2%)과 동일

❍ 교차점검 현황

(단위 : ㎞)

구 분	계	중 부	서 부	북 부	강 서	남 부	동 부	강 남	강 동
교차점검	3.79	0.44	0.42	0.41	0.61	0.59	0.46	0.43	0.43
위 치	8개소	후암동	대조동	수유동	방화동	가산동	묵동	삼성동	문정동

❍ 점검방법

- 용역 수행사 간 상호교차 탐사/측량(담당 입회)

구 분	서 북			서 남		동 남
	중 부	서 부	북 부	강 서	남 부	동 부	강 남	강 동
용역업체	신한항업, 아세아항측			공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템		제일항업, 중앙항업, 해양정보기술
교차점검	제일항업, 중앙항업, 해양정보기술			신한항업, 아세아항측		공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템
점검입회	정확도 개선사업 담당

- 성과일치여부 확인(공공측량성과심사 규정 기준 적용)

<지하시설물 조사/탐사 허용오차 범위>      <지하시설물 조사/탐사 적합 판단 기준>

대상물	오 차 범 위		비고
	평 면	심 도
금속관로	30㎝	30㎝	깊이 3.0m이내

구 분	적 합 기 준		비고
	평 면	심 도
조사/탐사	80%이상	80%이상

Ⅲ		점검결과

교차점검 결과

❍ 교차점검 결과현황

구 분	사업소	점 검 사 항	점 검 대 상	검 사 결 과
				일치 (점)	일치율 (%)	불일치 (점)	불일치율 (%)
계		평면	570	563	98.8	7	1.2
		심도	502	499	99.4	3	0.6
서 북	소계	평면	123	122	99.2	1	0.8
		심도	90	88	97.8	2	2.2
	중부	평면	46	45	97.8	1	2.2
		심도	32	32	100.0	-	0.0
	서부	평면	35	35	100.0	-	0.0
		심도	24	23	95.8	1	4.2
	북부	평면	42	42	100.0	-	0.0
		심도	34	33	97.1	1	2.9
서 남	소계	평면	174	174	100.0	-	0.0
		심도	174	173	99.4	1	0.6
	강서	평면	70	70	100.0	-	0.0
		심도	70	69	98.6	1	1.4
	남부	평면	104	104	100.0	-	0.0
		심도	104	104	100.0	-	0.0
동 남	소계	평면	273	267	97.8	6	2.2
		심도	238	238	100.0	-	0.0
	동부	평면	106	103	97.2	3	2.8
		심도	87	87	100.0	-	0.0
	강남	평면	86	85	98.8	1	1.2
		심도	86	86	100.0	-	0.0
	강동	평면	81	79	97.5	2	2.5
		심도	65	65	100.0	-	0.0

❍ 점검결과 분석

- 교차점검결과, 평면 570점 중 502점(일치율 : 98.8%), 심도 502점 중 499점(일치율 : 99.4%)이 일치하여 공공측량성과심사규정 적합기준(80% 이상)에 “만족”

Ⅳ		향후계획

교차검점 결과 중 불일치 성과는 재탐사/측량 지시

❍ 불일치 성과는 용역 수행사간 의견 및 자료공유 후 재확인

❍ 수정보완 : 2016. 10. 5.까지

붙임 : 1. 교차검사 결과보고서 각 1부.

2. 사진첩 1부.  끝.