투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재(식물매트) 변경 계약요청[2016년 한강숲(망원) 조성 공사]

1. 기반시설과-4004(2016.10.4.)호와 관련 입니다.

2. 기반시설과에서 추진중인 ｢2016년 한강숲(망원) 조성 공사｣ 관급자재에 대해 아래와 같이 수량변경,기간변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 수량변경 요청내역

납품요구번호	물품식별번호	품명 (규격)	단위	수량 변경			비고
				당초	변경	증감
12-16-1-38143-00	22675852	구절초 식물매트	매	270	290	증20
12-16-1-38143-00	22675863	비비추 식물매트	매	432	369	감63
12-16-1-38143-00	22675865	샤스타데이지 식물매트	매	1998	2,462	증464
12-16-1-38143-00	22675867	수호초 식물매트	매	378	215	감163
12-16-1-38143-00	22675868	쑥부쟁이 식물매트	매	378	209	감169
12-16-1-38143-00	22675869	옥잠화 식물매트	매	486	273	감213
12-16-1-38143-00	22675880	벌개미취 식물매트	매	324	224	감100

○ 납품기한변경 요청내역

- 당초 : 2016. 10. 14 / - 변경 : 2016. 11. 30.

나. 변경사유 : 식물매트 장소 변경에 따른 물량 변경 및 식재부적기인 하절기 공사중지에 따른 식재 공정이 늦어짐

붙  임 : 변경요청 공문 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	10/04 박병현
협조자
시행	총무과-17295	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)